15-4	노인복지관 건립 운영

담당부서	주민복지과 (노인복지담당)	담 당 자	이선정 (6240)	협조부서
사업구분	신규	완료시기	2022년 (임기내)	사업주체	영양군
사업기간	2018년 ~ 2022년 (연중운영)	총사업비	5,561백만원(도 500, 군 5,061)

	< 공약목표 >
◊ (최종목표) 노인복지관 건립 및 운영 - 최소의 재정부담으로 수요자중심의 원활한 노인복지관 및 프로그램 운영 - 노인복지프로그램의 거점화 추진으로 다변화하는 복지정책의 신속수용

사업개요

❍ 사업기간 : 2018. 9. ~ 2022. 12. 31(연중)

❍ 사업위치 : 영양군 영양읍 동부리 186번지 일원

❍ 총사업비 : 5,561백만원

❍ 사업규모 : 부지 1,904㎡(연면적 1,256.04㎡)

❍ 사업내용 :

- 노인복지관 1동(사무실, 물리치료실, 식당, 강당 등)

- 노인복지관 운영계획 수립 및 프로그램 도입 운영

연차별 추진계획

단위사업	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 6월
노인복지관 건립 운영	복지관 착공	공사 추진, 운영계획 수립	복지관 준공, 복지관 운영	복지관 운영	복지관 운영
이행율(%)	20%	60%	100%	100%	100%

연차별 투자수요

(단위 : 백만원)

연도별 재원별	임기내						임기후
	계	2018.7.~	2019	2020	2021	2022. 6.
계	5,561	4,310	-	417	417	417	-
국 비	-	-	-	-	-	-	-
도 비	500	500	-	-	-	-	-
시 군 비	5,061	3,810	-	417	417	417	-
민자 등	-	-	-	-	-	-	-
집행실적	1,297	579	718	-	-	-	-

추진현황

<추진실적>

❍ `18. 08. 노인복지관 신축 BF 예비인증 신청

❍ `18. 10. 노인복지관 신축공사 착공

❍ `19. 01. BF 예비인증 승인

❍ 기초형식 변경(MAT기초 → 콘크리트 파일 공법)

❍ `19. 03. 건축협의 승인

<향후계획>

❍ `19. 10. : 관리 운영계획 수립을 위한 벤치마킹

❍ `19. 12. : 운영계획 수립(군 직영 또는 위탁운영)

❍ `19. 12. : 운영 프로그램 도입계획 수립

❍ `20. 06. : 노인복지관 준공

추진상황	정상	완료시기	임기내	이행율	25%