1-8	건강기능개선작물 6차산업화가공센터설치

담당부서	농업기술센터 (생활자원담당)	담 당 자	이태훈 (5230)	협조부서	농촌진흥청 농촌자원과
사업구분	신규	완료시기	2021년 (임기내)	사업주체	군
사업기간	2019년~2021년	총사업비	1,800백만원(국500, 군1,300)

※ 자체평가 결과(`19.12월말)

추진상황				공약 이행율	연차별목표달성		재정현황(`18.7~`22.6 / 백만원)
완료	정상	일부	보류		여	부	총사업비(계획)	확보액	집행액
	●			50%	●		1,800	1,000	0

	< 공약목표 >
◊ (최종목표) 지역농산물 제조가공 설비시설 설치 완료 - 농업인의 농촌 융복합산업 활성화 지원을 통한 농가 소득 증대

사업개요

❍ 사업기간 : 2019년 ~ 2021년

❍ 사업위치 : 영양읍 현리 448-2번지 일원

❍ 총사업비 : 1,800백만원(국비500, 군비1,300)

❍ 사업규모 : 330㎡

❍ 사업내용 : 지역 농산물 제조·가공 설비시설 설치

연차별 추진계획

단위사업	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 6월
농산물종합 가공센터설치	계획수립	예산확보 사업 착공	사업준공	지속운영	지속운영
이행율(%)	20%	60%	100%	-	-

연차별 이행실적(`19.12월말)

단위사업	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 6월
농산물종합 가공센터설치	계획 수립	예산 확보 부지 확보	-	-	-
이행율(%)	20%	50%	-	-	-

연차별 투자수요

(단위 : 백만원)

연도별 재원별	합계	임기내						임기후
		계	2018.7.~	2019	2020	2021	2022. 6.
계	1,800	1,800	-	400	1,400	-	-	-
국 비	500	500	-	200	300	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-	-	-
시 군 비	1,300	1,300	-	200	1,100	-	-	-
민자 등	-	-	-	-	-	-	-	-

연차별 예산확보·집행액(`19.12월말)

(단위 : 백만원)

연도 재원	구분	합계	임기내						임기후
			계	`18.7.~	`19	`20	`21	`22. 6.
계	확보	1,000	1,000	-	400	600	-	-	-
	집행	-	-	-	-	-	-	-	-
국 비	확보	500	500	-	200	300	-	-	-
	집행	-	-	-	-	-	-	-	-
도 비	확보	-	-	-	-	-	-	-	-
	집행	-	-	-	-	-	-	-	-
시군비	확보	500	500	-	200	300	-	-	-
	집행	-	-	-	-	-	-	-	-
민자등	확보	-	-	-	-	-	-	-	-
	집행	-	-	-	-	-	-	-	-

추진현황

<추진실적>

❍ 2018.  7. : 농산물 제조‧가공 지원센터 추진계획수립

❍ 2018. 10. : 국비(균특) 예산확보

❍ 2018. 12. : 2019년 예산 유보액으로 반영

❍ 2019.  4. : 2019년 제1회 추경 예산 미반영

❍ 2019.  8. : 농림부 사업 포기서 제출 및 사업 위치 변경

❍ 2019.  9. : 2019년 제2회 추경 예산 반영

❍ 2019. 12. : 사업 대상지 공유재산 재산관리관 변경

<향후계획>

❍ 2020. ~ 2021. : 농산물 제조‧가공시설 설치

❍ 2022. ~ 2023. : 농산물 제조‧가공시설 안정화

문제점 및 대책

❍ 예산 확보 부족으로 인한 군비 추가 요구 필요

- 2020년 추경 시, 추가 군비 확보 및 의회 공감대 형성 노력

※ 공약 조정 내역

구분	당초	변경
사업기간	2019 ~ 2020	2019 ~ 2021
사업위치	일월면 가곡리 220	영양읍 현리 448-2
사업비	1,500백만원	1,800백만원
조정사유	(사업기간) 예산 확보 지연 및 사업 위치 변경으로 인한 기간 조정 (사업위치) 농가 이용성과 공공시설 활용성 제고를 위하여 위치 변경 (사 업 비) 동일 성격의 2개 사업 추진으로 인한 문제점을 보완하여 농림부 사업(15억)은 수정 계획 수립으로 신규 신청 계획, 농촌진흥청 사업(18억)을 영양군 실정에 맞추어 변경 추진 .