7-4	영양소방서 유치

담당부서	건설안전과 (안전관리담당)	담 당 자	이동규 (6671)	협조부서	-
사업구분	계속	완료시기	2020년 (임기내)	사업주체	군
사업기간	2018년 ~ 2020년	총사업비	2,500백만원(군)

※ 자체평가 결과(`19.12월말)

추진상황				공약 이행율	연차별목표달성		재정현황(`18.7~`22.6 / 백만원)
완료	정상	일부	보류		여	부	총사업비(계획)	확보액	집행액
	●			60%	●		2,500	1,298	932

	< 공약목표 >
◊ (최종목표) 임기내 영양소방서 유치를 위한 신축부지 확보 - 소방서 신축 건립으로 화재 및 각종 안전재난 발생에 군민 생활안전 보호

사업개요

❍ 사업기간 : 2018. ~ 2020.

❍ 사업위치 : 영양군 영양읍 하원리 343-8번지 일원(12필지)

❍ 총사업비 : 2,500백만원(군비 2,500)

❍ 사업규모 : 11,402㎡

❍ 사업내용 : 영양소방서 유치를 위한 부지매입 및 기반 조성

연차별 추진계획

단위사업	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 6월
소방서 유치	대상지 확정 및 관계기관협의 (낙동강유역환경청 등) 부지매입추진	부지매입추진 및 기반조성	기반조성	-	-
이행율(%)	20%	60%	100%	-	-

연차별 이행실적(`19.12월말)

단위사업	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 6월
소방서 유치	대상지 확정 및 관계기관협의 (낙동강유역환경청 등) 부지매입추진	부지매입추진 및 기반조성 실시설계
이행율(%)	20%	60%

연차별 투자수요

(단위 : 백만원)

연도별 재원별	합계	임기내						임기후
		계	2018.7.~	2019	2020	2021	2022. 6.
계	2,500	2,500	1,000	1,500	-	-	-	-
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-	-	-
시 군 비	2,500	2,500	1,000	1,500	-	-	-	-
민자 등	-	-		-	-	-	-	-

연차별 예산확보·집행액(`19.12월말)

(단위 : 백만원)

연도 재원	구분	합계	임기내						임기후
			계	`18.7.~	`19	`20	`21	`22. 6.
계	확보	1,298	1,298	998	300	-	-	-	-
	집행	932	932	4	928	-	-	-	-
국 비	확보	-	-	-	-	-	-	-	-
	집행	-	-	-	-	-	-	-	-
도 비	확보	-	-	-	-	-	-	-	-
	집행	-	-	-	-	-	-	-	-
시군비	확보	1,298	1,298	998	300	-	-	-	-
	집행	932	932	4	928	-	-	-	-
민자등	확보	-	-	-	-	-	-	-	-
	집행	-	-	-	-	-	-	-	-

추진현황

<추진실적>

❍ ’18.  9. : 영양소방서 신축 부지 최종 결정

❍ ’19.  7. : 소방서 신축 부지 매입 완료

<향후계획>

❍ ’20.  1. : 소방서 신축 실시설계(道, 설계비 : 425백만원)

❍ ’20.  8. : 소방서 신축기반 부지조성사업 실시설계

❍ ’20. 10. : 소방서 신축기반 부지조성사업* 추진

* 기본조성사업 : 부지조성(H=3), 진입도로, 부지정리, 상하수도 인입 등

❍ ’21.  1. : 영양소방서 신축사업 추진(道)