8-4	지방도 920호선 1단계사업(진보~석보) 조기완공

담당부서	건설안전과 (도로담당)	담 당 자	이창훈 (6721)	협조부서	-
사업구분	신규	완료시기	2021년 (임기내)	사업주체	경상북도
사업기간	2014년 ~ 2021년	총사업비	14,992백만원(도14,992)

※ 자체평가 결과(`19.12월말)

추진상황				공약 이행율	연차별목표달성		재정현황(`18.7~`22.6 / 백만원)
완료	정상	일부	보류		여	부	총사업비(계획)	확보액	집행액
	●			20%	●		14,992	6,450	6,450

	< 공약목표 >
◊ (최종목표) 지방도920호선(신촌~답곡) 구간 도로 개설 완료 - 동서4축 상주∼영덕간 고속도로의 영양I.C인 진보면 신촌리~석보면 답곡리까지 지방도920호선 미개설 구간을 연결하여 접근성을 확보하고자 함.

사업개요

❍ 사업기간 : 2014. ~ 2021.

❍ 사업위치 : 석보면 답곡리, 진보면 신촌리 일원

❍ 총사업비 : 14,992백만원(도비 14,992)

❍ 사업규모 : 도로개설 2차로 (B=9.5m), L=2.77㎞

❍ 사업내용 : 동서4축 상주 ~ 영덕 간 고속도로의 영양I.C인 진보면           신촌리 ~ 석보면 답곡리까지 지방도 920호선 미개설           구간을 연결하여 접근성을 확보

연차별 추진계획

단위사업	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 6월
지방도 920호선 1단계사업	조속추진 건의	조속추진 건의	조속추진 건의	사업완료	-
이행율(%)	20%	40%	80%	100%	-

연차별 이행실적(`19.12월말)

단위사업	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 6월
지방도 920호선 1단계사업	실시설계	사업 진행 (답곡구간)	-	-	-
이행율(%)	10%	20%	-	-	-

연차별 투자수요

(단위 : 백만원)

연도별 재원별	합계	임기내						임기후
		계	2018.7.~	2019	2020	2021	2022. 6.
계	14,992	14,992	2,450	4,000	4,000	4,000	2,042	-
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-
도 비	14,992	14,992	2,450	4,000	4,000	4,000	2,042	-
시 군 비	-	-	-	-	-	-	-	-
민자 등	-	-	-	-	-	-	-	-

연차별 예산확보·집행액(`19.12월말)

(단위 : 백만원)

연도 재원	구분	합계	임기내						임기후
			계	`18.7.~	`19	`20	`21	`22. 6.
계	확보	6,450	6,450	2,450	4,000	-	-	-	-
	집행	6,450	6,450	2,450	4,000	-	-	-	-
국 비	확보	-	-	-	-	-	-	-	-
	집행	-	-	-	-	-	-	-	-
도 비	확보	6,450	6,450	2,450	4,000	-	-	-	-
	집행	6,450	6,450	2,450	4,000	-	-	-	-
시군비	확보	-	-	-	-	-	-	-	-
	집행	-	-	-	-	-	-	-	-
민자등	확보	-	-	-	-	-	-	-	-
	집행	-	-	-	-	-	-	-	-

추진현황

<추진실적>

❍ ’18. 09 : 경상북도 방문 면담 건의 (안전재난건설과장)

❍ ’19년 : 경상북도 방문 조속추진 건의

❍ ’19년 : 1단계 사업 진행 중(석보면 답곡구간)

❍ ’19년 : 2단계 사업 실시설계 용역 추진 중

<향후계획>

❍ ’20년 : 경상북도 방문 조속추진 건의

문제점 및 대책

❍ 청송군 진보면 신촌리 구간의 보상협의 지연

❍ 지역간 협력을 통하여 사업 추진 독려