12-2	일·가정 양립 인구지킴이 민관공동체 센터 구축

담당부서	경제일자리과 (일자리인구팀)	담 당 자	조영택 (6581)	협조부서	주민복지과 지역개발과
사업구분	계속	완료시기	2021년(임기내)	사업주체	군
사업기간	2018년 ~ 2021년	총사업비	1,667백만원(국1,000, 도200, 군467)

※ 자체평가 결과('21. 06.)

추진상황				공약 이행률	연차별목표달성		재정현황(`18.7~`22.6 / 백만원)
완료	정상	일부	보류		여	부	총사업비(계획)	확보액	집행액
●				100%	●		1,667	1,667	1,459

	< 공약목표 >
◊ (최종목표) 저출산 육아 문제를 비롯한 인구감소에 적극적으로 대응 - 민관이 긴밀하게 연계하여 복합적인 인구 문제를 입체적으로 해소

사업개요

❍ 사업기간 : 2018. ~ 2021.

❍ 사업위치 : 영양읍 서부리 501-3, 502-2번지

❍ 총사업비 : 1,667백만원

❍ 사업규모 : 건축면적 307㎡, 연면적 635㎡ 3층(필로티구조)

❍ 사업내용 : 키즈카페, 사무실, 민관 공동체 회의 시설 등

- 인구 문제에 대한 민관 공동 거버넌스 구축 및 대응

연차별 추진계획

단위사업	2018년	2019년	2020년	2021년		2022년 6월
				상반기	하반기
인구지킴이 민관공동체 대응센터 건립	부지 매입	설계용역, 착공	준공 및 개관	지속운영	지속운영	지속운영
이행률	20%	50%	100%	100%	100%	100%

연차별 이행실적('21. 06.)

단위사업	2018년	2019년	2020년	2021년		2022년 6월
				상반기	하반기
인구지킴이 민관공동체 대응센터 건립	-	착공	건축공사 준공	개관, 운영	-	-
이행률	-	50%	90%	100%	-	-

연차별 투자수요

(단위 : 백만원)

연도 재원	합계	임기내						임기후
		계	2018.7.~	2019	2020	2021	2022. 6.
계	1,667	1,667	-	544	1,123	-	-	-
국 비	1000	1,000	-	172	828	-	-	-
도 비	200	200	-	200	-	-	-	-
군 비	467	467	-	172	295	-	-	-
민자 등	-	-	-	-	-	-	-	-

연차별 예산확보·집행액('21. 06.)

(단위 : 백만원)

연도 재원	구분	합계	임기내						임기후
			계	'18.7. ~	'19.	'20.	'21.	'22. 6.
계	확보	1,667	1,667	1,667	-	-	-	-	-
	집행	1,459	1,459	-	544	915	-	-	-
국 비	확보	1,000	1,000	1,000	-	-	-	-	-
	집행	1,000	1,000	-	172	828	-	-	-
도 비	확보	200	200	200	-	-	-	-	-
	집행	200	200	-	200	-	-	-	-
군비	확보	467	467	467	-	-	-	-	-
	집행	259	259	-	172	87	-	-	-
민자 등	확보	-	-	-	-	-	-	-	-
	집행	-	-	-	-	-	-	-	-

추진현황

<추진실적>

❍ `19.  6. : 기본 및 실시설계용역(건축, 전기 및 기타공사)

❍ `19.  2. : 도시재생뉴딜사업과 연계시행 협의

❍ `19.  5. : 장애물 없는 생활환경 예비인증 발급

❍ `19.  7. : 설계완료 및 공사계약

❍ `19.  8. : 건축공사 착공

❍ `20.  5. : 건축공사 준공

❍ `20.  6. : 실내놀이시설 설계용역 완료

❍ `21.  6. : 실내 놀이시설 인테리어 공사 완료

❍ `21.  2. : 인구지킴이 민관공동체 센터 개관

- 키즈카페, 청년창업지원센터, 귀농지원센터, 이장협의회, 안동고용 복지센터 영양출장소 운영

[공약 조정 내역 및 승인 여부]

심의방법	군민 공약평가단 심의 승인			승인일자	2021. 2. 22
관리번호	12-2		담당부서	유통일자리과	담당자	홍성도
공 약 명	일·가정 양립 인구지킴이 민관공동체 센터 구축
변경 내용	변경 사항	<변경 전> ◦추진계획 : 2019년 준공 <변경 후> ◦추진계획 : 2021년 준공
	변경 사유	사업부지 변경 및 BF인증 기간소요에 따른 사업기간 연장