12-1	도시민 정착촌 조성

담당부서	경제일자리과 (일자리인구팀)	담당자	김승범 (6581)	협조부서	-
사업구분	신규	완료시기	2024년(임기후)	사업주체	군
사업기간	2020년 ~ 2024년	총사업비	8,600백만원(도비 2,000 군비 6,600)

※ 자체평가 결과('21. 12.)

추진상황				공약 이행률	연차별목표달성		재정현황(`18.7~`22.6 / 백만원)
완료	정상	일부	보류		여	부	총사업비(계획)	확보액	집행액
●				100%	●		8,600	5,452	1,913

	< 공약목표 >
◊ (최종목표) 탈북민을 포함한 귀농귀촌 희망자, 도시 청년 주거시설 임대를 통한 귀농인구 유입으로 인구증가

사업개요

❍ 사업기간 : 2020. ~ 2024.

❍ 사업위치 : 영양읍 삼지리, 청기면 청기리

❍ 총사업비 : 8,600백만원

❍ 사 업 량 : 2개소

❍ 사업내용 : 체류형 귀농체험마을 조성 후 1개소 확대시행

- (1차) 체류형 귀농체험마을 조성(체험농장 및 주택 10호, 삼지리)

- (2차) 경북형 작은정원 조성(도 공모사업으로 추진, 청기리)

연차별 추진계획

단위사업	2018년	2019년	2020년	2021년		2022년 6월
				상반기	하반기
정착촌 유 치	-	-	부지매입 및 설계용역 시행	설계완료 및 기반조성 시행	기반조성 완료 및 공모선정	정착촌 준공 및 확대조성
이행률	-	-	30%	50%	100%	100%

연차별 이행실적('21. 12.)

단위사업	2018년	2019년	2020년	2021년		2022년 6월
				상반기	하반기
정착촌 유 치	-	-	부지매입 및 설계용역 시행	설계완료 및 기반조성 시행	기반조성 완료 및 공모선정	-
이행률	-	-	30%	50%	100%	-

연차별 투자수요

(단위 : 백만원)

연도 재원	합계	임기내						임기후
		계	2018	2019	2020	2021	2022
계	8,600	8,600			1,000	1,700	5,900
도 비	2,000	2,000				300	1,700
군 비	6,600	6,600			1,000	1,400	4,200

연차별 예산확보·집행액('21. 12.)

(단위 : 백만원)

연도 재원	구분	합계	임기내						임기후
			계	2018	2019	2020	2021	2022
계	확보	5,452	5,452			1,000	1,752	2,700
	집행	1,913	1,913			953	960
도비	확보	2,000	2,000				300	1,700
	집행
군비	확보	3,452	3,452			1,000	1,452	1,000
	집행	1,913	1,913			953	960

추진현황

❍ `20.  5. : 사업부지 매입 완료(삼지리, 청기리)

❍ `20. 12. : 실시설계용역 완료(삼지리)

❍ `21.  2. : 부지 조성 및 토목 공사 착공(삼지리)

❍ `21. 11. : 부지 조성 및 토목 공사 준공(삼지리)

❍ `21. 11. : 도 공모사업 선정(경북형 작은정원 조성사업)

❍ `22. 상반기

- 체류형 귀농체험마을 건축 공사(삼지리)

- 경북형 작은정원 설계공모 및 사전절차 이행(청기리)

[공약 조정 내역]

담당부서		경제일자리과	담당자	조영택	승인일자	2021. 3. 12.
변경 내용	<변경 전> ◦(사 업 명) 북한 이탈주민 영농정착촌 유지 ◦(사업내용) 북한이탈 주민의 안정적인 일자리와 정착 지원을 위한 기반조성(농경지, 임대주택 등) <변경 후> ◦(사 업 명) 도시민 정착촌 조성 ◦(사업내용) 체류형 귀농체험마을, 경북형 작은정원 조성
사유	◦탈북과정, 사생활 등의 문제로 공동거주 거부감 ◦귀농·귀촌 희망자 및 외부 청년 대상자 유입정책과 함께추진시 효과 극대화로 소규모 정착촌 형태로 추진

담당부서

경제일자리과

담당자

김승범

승인일자

2022. 1. 28.

변경

내용

<변경 전>

◦(연차별 추진계획)

단위사업	2020년	2021년		2022년 6월
		상반기	하반기
정착촌 유 치	부지매입	기반조성 공사시행	건축공사 시 행	정착촌 준공 및 확대조성
이행률	30%	70%	100%	100%

<변경 후>

◦(연차별 추진계획)

단위사업	2020년	2021년		2022년 6월
		상반기	하반기
정착촌 유 치	부지매입 및 설계용역 시행	설계완료 및 기반조성 시행	기반조성 완료 및 공모선정	정착촌 준공 및 확대조성
이행률	30%	50%	100%	100%

사유

◦ 공모사업 일정 변경(재공모)에 따른 공모사업 추진계획 변경