9-1	시장 점포 창틀셔터 교체

담당부서	경제일자리과 (경제정책팀)	담당자	박성민 (6322)	협조부서	-
사업구분	신규	완료시기	2020년(임기내)	사업주체	군
사업기간	2019년 ~ 2020년	총사업비	400백만원(군비 400)

※ 자체평가 결과('21. 12.)

추진상황				공약 이행률	연차별목표달성		재정현황(`18.7~`22.6 / 백만원)
완료	정상	일부	보류		여	부	총사업비(계획)	확보액	집행액
●				100%	●		400	400	320

	< 공약목표 >
◊ (최종목표) 전통시장 내 점포 창틀 등 교체 - 전통시장의 오래된 창문틀(새시)를 교체하여 깨끗하고 쾌적한 환경을 조성 - 이용 주민과 상인들의 편의 제공과 지역경제 활성화에 기여

사업개요

❍ 사업기간 : 2019. ~ 2020.

❍ 사업위치 : 영양읍 시장5길 4

❍ 총사업비 : 400백만원

❍ 사업규모 : 점포 62개

❍ 사업내용 : 전통시장 점포 창틀(새시) 교체사업 1식

연차별 추진계획

단위사업	2018년	2019년	2020년	2021년		2022년 6월
				상반기	하반기
전통시장 창틀 교체	계획수립 및 예산확보	사업추진 (착공)	사업완료 (준공)	-	-	-
이행률	20%	50%	100%	-	-	-

연차별 이행실적('21. 12.)

단위사업	2018년	2019년	2020년	2021년		2022년 6월
				상반기	하반기
전통시장 창틀 교체	계획수립 및 예산확보	사업추진 (착공)	사업추진 (준공)	-	-	-
이행률	20%	50%	100%	-	-	-

연차별 투자수요

(단위 : 백만원)

연도 재원	합계	임기내						임기후
		계	2018	2019	2020	2021	2022
계	400	400		100	300
군비	400	400		100	300

연차별 예산확보·집행액('21. 12.)

(단위 : 백만원)

연도 재원	구분	합계	임기내						임기후
			계	2018	2019	2020	2021	2022
계	확보	400	400		400
	집행	320	320		100	220
군비	확보	400	400		400
	집행	320	320		100	220

추진현황

❍ `19.  5. : 실시설계 완료

❍ `19.  5. : 시장상인회 사업설명회 개최

❍ `19. 12. : 사업 발주 및 착공

❍ `20.  7. : 사업완료

[공약 조정 내역]

담당부서	지역경제과	담당자	오재룡		승인일자	2020. 1. 21.
변경 내용	<변경 전> ◦(사 업 비) 300백만원 ◦(사업기간) 2019년			<변경 후> ◦(사 업 비) 400백만원 ◦(사업기간) 2019년~2020년
사유	◦실시설계 결과 실소요 사업비 증가 및 상인회 협의 지연