9-1	시장 점포 창틀셔터 교체

담당부서	지역경제과 (경제정책담당)	담당자	김승범 (6322)	협조부서	-
사업구분	신규	완료시기	2019년 (임기내)	사업주체	군
사업기간	2019년	총사업비	300백만원

	< 공약목표 >
◊ (최종목표) 전통시장 내 점포 창틀 등 교체 - 전통시장의 오래된 창문틀(새시)를 교체하여 깨끗하고 쾌적한 환경을 조성 - 이용 주민과 상인들의 편의 제공과 지역경제 활성화에 기여

사업개요

❍ 사업기간 : 2019년 중

❍ 사업위치 : 영양군 영양읍 시장5길 4

❍ 총사업비 : 300백만원(군비)

❍ 사업규모 : 점포 62개

❍ 사업내용 : 전통시장 점포 창틀(새시) 교체사업 1식

연차별 추진계획

단위사업	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 6월
전통시장 (새시)교체	계획수립 및 예산확보	사업추진 및 완료	-	-	-
이행율(%)	20%	100%	100%	100%	100%

연차별 투자수요

(단위 : 백만원)

연도별 재원별	합계	임기내						임기후
		계	2018.7.~	2019	2020	2021	2022. 6.
계	300	300	-	300	-	-	-	-
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-	-	-
시 군 비	300	300	-	300	-	-	-	-
민자 등	-	-	-	-	-	-	-	-
집행실적	-	-	-	-	-	-	-	-

추진현황

<추진실적>

❍ 2018년 9월 : 2019년 예산 요구

❍ 2019년 2월 ~ 5월 : 실시설계 완료

❍ 2019년 5월 : 시장상인회 사업설명회 개최

<향후계획>

❍ 2019년 7월 ~ 11월 : 사업추진 및 완료

문제점 및 대책

❍ 시장 내 전체 점포대상 실시설계 결과 공사비 400백만원이 소요되어 예산이 부족함

❍ 현재 예산으로 일부점포에만 사업시행 시 환경개선을 통한 이미지 제고라는 사업목적의 달성이 어려움

❍ 또한, 사업설명회에서 상인들의 전체점포에 대한 사업시행 요구

❍ 이에, 추경 등을 통해 예산 추가확보 후 전체 점포에 사업시행

추진상황	정상	완료시기	임기내	이행율	20%